/ 

SMLOUVA MANDÁTNÍ 
  
Čl.l- SMLUVNÍ STRANY 

Mandant: 
a 

Obec  Dýšina
  
IČ:   00257745
Zastoupená: 	Mgr. Jaroslavem Štilipem
                     starostou obce  

Mandatář:   
Sídlo:   
zapsaná v obchodním rejstříku u KS v Plzni  
IČ:   DIČ:
Bankovní spojení:   
	Zastoupená: 	  
 
ČI. 2 - PŘEDMĚT SMLOUVY 
Výkon technického dozoru investora na akci 
 
Dýšina – ČOV, část B v rámci akce Čistá Berounka II etapa – podprojekt 4 – ČOV a kanalizace
Smlouva se uzavírá v souladu se Všeobecnými obchodními podmínkami pro inženýring ve 
výstavbě, vypracovanými Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě 
a Svazem podnikatelů ve stavebnictví ČR v rozsahu dle článku 6, odst. 3, bod e), f), g). 
Mandatář provede pro mandanta výkon - úplný rozšířený inženýring (dle ČKAIT) na akci předmětu 
smlouvy. 
Výkon funkce technického dozoru investora pro fázi 
o	Realizační přípravy 
o	Realizace na staveništi 
o	Ověření a vyzkoušení funkcí stavby - kolaudace 

 

 

Podrobnější rozsah jednotlivých činností a jejich členění je uveden v příloze č. 1, která je nedílnou 
součástí této smlouvy. 
Či. 3 - ČAS PLNĚNÍ 
Mandatář bude činnost dle předchozího odstavce provádět od doby účinnosti této smlouvy 
do nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí, a případně do odstranění vad a nedodělků zjištěných při 
přejímacím a kolaudačním řízení, pokud se tyto vyskytnou. 
ČI.4-NÁHRADA ŠKOD 
Mandatář prohlašuje, že ode dne podpisu této smlouvy po celou dobu jejího trvání má 
zajištěno pojištění své činnosti v dostatečném rozsahu pro případ způsobení škod. 
Mandatář je povinen mandantovi nahradit veškerou škodu, která mandantovi vznikne 
v důsledku porušení jakékoliv povinnosti mandatáře, vzniklé mu na základě této smlouvy. 
ČI. S-CENA 
Cena za činnost podle předmětu smlouvy je stanovena dohodou v celkové výši 

1. Zajištění technického dozoru 
CELKOVÁ CENA BEZ DPH; 
DPH 19% 
CELKOV Á CENA S DPH 

  Kč 
  Kč 
  Kč 
  Kč 

Faktury (daňové doklady) budou vystavovány podle průběhu prací se lhůtou splatnosti 14 dnů. 
ČI. 6 - OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 
Mandant předá mandatáři veškeré údaje o stavbě, nutné k výkonu činnosti. Mandant se zavazuje, že 
uhradí správní poplatky. Mandatář je dále povinen řídit se pokyny oprávněného zástupce mandanta. 
V případě odstoupení nebo ukončení smlouvy ze strany mandanta budou mandatáři uhrazeny všechny 
prokazatelné náklady podle průběhu akce. 
Mandatář je povinen oznamovat mandantu všechny okolnosti, které zjistil při plnění předmětu 
smlouvy a mohou mít vliv na změnu pokynů mandanta. Od pokynů mandanta se mandatář může odchýlit jen 
tehdy, je-li to naléhavě nezbytné a hrozí-li škoda z prodlení. 

 

2 

 
Smlouvu lze změnit jen písemnými dodatky. 
Smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu druhé ze smluvních stran. 
Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, přičemž každá z obou smluvních stran obdrží po 
jednom vyhotovení. 
Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou touto smlouvou upraveny, se řídí ustanoveními 
Obchodního zákoníku v platném znění. 

	V Plzni dne …………….

Mandatář

3 

	V ………………..

Mandant

PŘÍLOHA Č.l 
A) PRÁCE SPOJENÉ S REALIZACÍ STAVBY 
a) Organizační činnost 
O poradenství 
	O 	organizační zabezpečení povinností zadavatele (investora) při individuálním a komplexním vyzkoušení a účast 
na těchto zkouškách 
b) Výkon technického dozoru investora v tomto rozsahu: 
o	seznámení se s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby, obzvlášť s projektem, s obsahem smluv 
a s obsahem stavebního povolení 
O účast při odevzdání staveniště zhotovitelům a zabezpečení zápisu do stavebního deníku 
O účast při protokolárním odevzdání základního směrového a výškového vytyčení stavby zhotovitelům 
O účast na kontrolním zaměření terénu zhotovitelem před zahájením prací 
O dodržení podmínek stavebního povolení a opatření státního stavebního dohledu po dobu realizace stavby 
	O 	kontrola kvality prováděných prací, kontrola dodržování technologií, bezpečnosti práce, smluvních podmínek a 
projektu stavby 
	O 	péče o systematické doplňování dokumentace, podle které se stavba realizuje, a evidence dokumentace 
dokončených částí stavby 
	O 	projednání dodatků a změn projektu, které nezvyšují náklady stavebního objektu, neprodlužují lhůtu výstavby a 
nezhoršují parametry stavby, u ostatních dodatků a změn předloží s vlastním vyjádřením investorovi 
O bezodkladné informování investora o všech závažných okolnostech 
	O 	kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti oceň ovacích podkladů a faktur zhotovitelů, jejich souladu s 
podmínkami smluv a jejich předkládání k likvidaci investorovi 
O kontrola a stanovení skutečného množství prací, výkonů a dodávek podle zadávacích podkladů a výkazu 
výkonů 
O kontrola čerpání nákladů 
O kontrola těch částí dodávek, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými 
	O 	spolupráce v souladu se smlouvami odevzdání připravené práce dalším zhotovitelům pro jejich navazující 
činnosti 
	O 	spolupráce s pracovníky generálního projektanta, kteří vykonávají autorský dozor, při zabezpečování souladu 
realizovaných dodávek a prací s projektem 
	O 	spolupráce s generálním projektantem a s zhotoviteli při vykonávání nebo navrhování opatření na odstranění 
případných závad projektu 
O vyžadování zajišťování předepsaných zkoušek materiálů, konstrukcí a prací od zhotovitelů, kontrola jejich 
výsledků a vyžadování dokladů, které prokazují kvalitu vykonaných prací a dodávek 
O sledování vedení stavebních deníků v souladu s podmínkami smluv 
O uplatňování námětů, směřujících k zhospodárnění provozu (užívání) dokončené stavby 
O hlášení archeologických nálezů 
	O 	spolupráce s pracovníky zhotovitelů při vykonávání opatření na odvrácení nebo na omezení škod při ohrožení 
stavby živelnými událostmi 
O kontrola postupu prací podle časového plánu stavby a smluv a upozorňování zhotovitelů na nedodržení 
termínů, včetně přípravy podkladů pro uplatnění majetkových sankcí 
O kontrola podkladů pro odevzdání a převzetí stavby nebo jejích částí a účast na odevzdání a převzetí 
O kontrola odstraňování vad a nedodělků zjištěných při přebírání v dohodnutých termínech 
O účast na kolaudačním řízení 
O kontrola vyklizení stavby a staveniště zhotovitelem 
B) PRÁCE PO DOKONČENÍ STAVBY 
o	spolupráce při zabezpečení kolaudačního rozhodnutí, případně povolení k předčasnému nebo dočasnému 
užívání stavby nebo její části 
O spolupráce se zadavatelem při uplatňování požadavků vyplývajících z kolaudačního řízení 
O pomoc při případném zpracování závěrečného vyhodnocení akce 

4 

1-_